과업지시서

용역명 : KBS미디어센터 정밀안전진단 용역

2018. 11. 9

KBS미디어

목 차
	Ⅰ		용역설명서
	Ⅱ		과업지시서

용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : KBS미디어센터 건물정밀안전진단 용역

2. 용역 목적

본 과업은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 (이하“시설물안전법”이라 한다) 제7조에 따른 제1종시설물인 “KBS미디어센터”를 진단대상으로 하는 정밀안전진단으로서, 법 제12조 제1항 및 이에 따른 동법 시행령 제10조 제1항의 별표3에 따라 준공 후 10년이 경과된 이후 1년 이내에 실시하는 정밀안전진단이다. 본 정밀안전진단은 시설물의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 보수, 보강 등의 방법을 제시하고자 함에 목적이 있다. 또한 이를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 “KBS미디어센터” 건물의 안전을 확보하는데 궁극적인 목적이 있다.

3. 건물개요

가. 위    치 : 서울특별시 매봉산로 45 (상암동 KBS미디어센터)

나. 과업범위 : 정밀안전진단 (정밀안전진단 및 실효성 있는 유지관리방안 제시)

다. 과업기간 : 착수일로부터 45일

ㅇ 규 모 : 지하5층, 지상21층 ㅇ 연면적 : 44,838.74㎡(1종) ㅇ 구 조 : 철골철근콘크리트조 ㅇ 최고높이: 95.61m ㅇ 설계자 : 희림건축사사무소 ㅇ 시공자 : 대림산업(주) ㅇ 준공년월일 : 2007년11월16일 ㅇ 주용도 : 업무시설,근린생활시설 ㅇ 기 초 : 독립기초 + 콘크리트 PILE

■KBS미디어센터건물 현황

4. 용역 적용기준

가. 시설물의 안전 및 유지관리에  관한 특별법(국토교통부 2018.1.18.)

나. 시설물 안전 및 유지관리 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-45호

2018.1.18.)

다. 콘크리트 표준시방서

라. 건축구조기준(KBC2016)

마. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격(KS)

바. 국토교통부 발행 각종 관련 표준시방서

5. 중점 점검사항

가. 지하5~2층 주차장 바닥 및 벽체 누수, 균열 등

나. 지하주차장 램프 균열

다. 지하1층 주방, 창고 등 누수 및 균열 등

라. 지하1층 선큰 대리석 벽체 누수, 백화 및 철제 부식 등

마. 지상21층 화장실 벽체 균열 등

바. 옥상 헬리포트 철골부재, 접합부 부식 등

사. 지붕층 옥상 안테나 상태

아. 저층부, 고층부 계단 코아 균열  등

6. 보수·보강 및 유지관리지침 제시

정밀안전진단에 따른 보수.보강 순위 및 수준, 적절한 공법 및 재료 선정 등을 실효성 있게 검토하여 유지관리지침에 제시

가. 기술적 사항 : 향후 점검요령, 보수 · 보강 수준, 우선순위(중 · 장기적), 공법 및 재료소개

나. 관리적 사항 : 진단 결과에 따른 실효성 있는 관리지침 제시(새로운 공법, 검증된 방법으로 관련시방을 첨부하여 제시)

7. 과업추진 인건비의 정산

가. 정산 대상은 외업인원, 외업보조인부(특별인부), 전문가 자문비로 하되 그로 인해 변동되는 제반비용을 포함한다.

나. 외업 인건비는 고급기술자 1인을 기준으로 하되, 특급, 중급, 초급 등은 엔지니어링 대가기준에 의거 노임단가 기준으로 지수를 적용 인원을 산정한다.

8. 과업 진행시 유의사항

가. 계약상대자(용역시행자)는 과업을 위한 착수 신고서, 사전검토서, 과업수행계획서, 인력 및 장비투입계획서, 공정표, 사업책임기술자 선임신고서 및 보안책임자 선임계를 제출하여 발주처에서 지정한 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 계약상대자는 현장대리인(책임기술자)을 배치함에 있어 시설물안전법 시행령 제9조제1항 별표5에서 규정한 자격을 갖추고, 기술과 경험이 풍부하며, 본 용역과 유사한 건축물의 정밀안전진단 책임기술자 경험이 있는 자를 선정하여 감독자의 확인을 받아 용역 착수와 동시에 현장에 상주토록 조치한다.

다. 계약상대자는 과업수행 시 과업참여기술자에 대한 안전 및 보안교육을 실시하여 과업기간 동안 안전 및 보안 관리를 철저히 하고, 민 · 형사상의 문제 발생 시 모든 책임을 진다.

라. 계약상대자는 사전조사를 통해 현장과 주변을 정확히 파악하고, 본 과업으로 인한 인근 시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 시설물 훼손이 있을 경우 즉시 원상복구 및 변상조치 하여야 한다.

마. 본 용역 시행에 있어서 현장 상황에 따라 과업범위를 변경할 수 있으며 이때는 감독자의 승인을 받아야 한다.

바. 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 기술상 과오, 부실진단 등 결격사유가 발견된 경우에는 용역완료 전 · 후를 막론하고 발주처 지시에 따라 지체 없이 계약상대자의 비용부담으로 보완조치 하여야 한다.

사. 계약상대자는 정밀안전진단 결과에 대한 평가가 부실진단이라 판명 시 재진단을 실시하여야 하며, 이에 따른 소요 제반비용은 계약상대자가 부담한다.

아. 발주처가 인정하는 특별한 사유가 없는 한 공정 지연으로 인하여 발생되는 손해책임은 과업수행자에게 있다.

자. 과업지시서에 표기되지 않았거나 누락되었다 할지라도 본 용역의 목적에 필요한 경미한 사항은 수급자 부담으로 완료 한다.

차. 과업수행 중 업무에 지장이 있다고 판단되는 작업은 감독자의 지시에 따라 일정을 조정하여 과업을 진행한다.

카. 기타 필요한 사항은 발주처와 협의하여 처리한다.

과 업 지 시 서

1. 일반조건

1.1 과업명 : KBS미디어센터 건물정밀안전진단 용역

1.2 과업의 범위

가. 진단대상시설물 개요

ㅇ 규 모 : 지하5층, 지상21층 ㅇ 연면적 : 44,838.74㎡(1종) ㅇ 구 조 : 철골철근콘크리트조 ㅇ 최고높이: 95.61m ㅇ 설계자 : 희림건축사사무소 ㅇ 시공자 : 대림산업(주) ㅇ준공년월일 : 2007년11월16일 ㅇ 주용도 : 업무시설,근린생활시설 ㅇ 기 초 : 독립기초 + 콘크리트 PILE

나. 정밀안전진단 대상시설물의 범위

구분	시설물 명	정밀안전전진단 대상범위		비고
		정밀안전진단 대상시설 범위	금회 대상시설 범위
주요 부재	기둥	〇	〇	기본과업
	보	〇	〇
	슬래브	〇	〇
	내력벽	〇	〇
	지붕	〇	〇
	주계단	〇	〇
보조 부재	옹벽	해당사항 없음	해당사항 없음
	절토사면	해당사항 없음	해당사항 없음

1.3 과업 세부내용

본 과업은 ‘시설물안전법’ 규정에 따라 실시하는 과업으로 ‘시설물 안전 및 유지관리 등에 관한 지침’의 정밀안전진단 기본과업을 수행하여야 한다.

가. 자료수집 및 분석

나. 현장조사 및 시험

다. 상태평가

라. 안전성평가

마. 종합평가

바. 보수･보강방법

사. 종합결론 및 건의사항(유지관리지침 포함)

아. 보고서작성

1.4 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주처의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 기타 감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 착수신고서 제출

가. 계약상대자가 과업착수 시 제출할 착수신고서와 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

ㅇ 착수신고서

ㅇ 과업수행계획서

ㅇ 인력 및 장비투입 계획서

ㅇ 공정표

ㅇ 사업책임기술자 선임신고서

ㅇ 사업수행 조직표

ㅇ 안전관리계획서

ㅇ 사전검토 보고서

나. 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서 등 유지관리자료와 과업지시서 등이 법령 및 지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다. 다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.

다. 설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

라. 설계도서 등의 사전검토보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀안전진단 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

마. 계약상대자는 상기 1.5.1항의 착수신고서류 2부를 관리주체에 제출하여야 한다.

1.5.2 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 주간 진도보고를 매주 초(월요일)을 기준으로 하여 진단책임기술자의 확인을 받아 관리주체에 제출하여야 한다.

ㅇ 과업추진내용 및 공정현황

일 정 과업 세부내용	1주차		2주차		3주차		4주차		5주차		비 고
	1~7		8~14		15~21		22~28		29~40
용역착수 준비
자료수집 및 검토
현장조사 및 시험
자료정리
상태평가
안전성평가
평가결과 분석, 보수.보강 및 유지관리방안 작성
종합보고서 작성 및 제출											FMS등록 완료

1.6 과업수행자의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.7 안전관리

1.7.1 일반

정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

1.7.2 정밀안전진단 종사자의 안전

가. 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

나. 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

1.7.3 공공의 안전

공공의 안전 측면에서 관리주체는 정밀안전진단 실시기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

1.8 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 관리주체와 계약상대자가 상호 협의하여 결정해야 한다.

2. 진단계획 및 세부사항

2.1 진단계획

2.1.1 일반

진단계획은 현장에서 사전조사를 실시한 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

가. 현장여건 및 문제점

나. 시설관리자 의견 청취

다. 제반 시설관련 자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 사전정보를 갖고 임하도록 한다.

2.1.2 진단계획 수립

사전조사 시 수집된 자료를 검토 후 진단계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 조사범위 및 항목 결정

ㅇ 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 진단계획에 맞추어 결정

ㅇ 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우, 별도 조사항목 포함

나. 기존 진단 · 점검 자료 검토

ㅇ 기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

다. 분야별 소요인원 및 구성

ㅇ 분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획 수립

라. 재료시험 실시에 대한 적정성 여부 판단

마. 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

바. 진단범위 및 안전성에 대한 판단

사. 진단장비 선정

구조물의 진단에 필요한 재료시험 장비, 측량장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사 항목에 부합되는 장비를 준비하도록 한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 점검 장비에 의한 측정이 가능하도록 사다리, 고소차, 비계 등을 준비한다. 이러한 장비 선정 시에는 다음의 항목을 고려한다.

ㅇ 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

ㅇ 장비위치에 따른 교통 통제의 필요성

ㅇ 장비설치에 따른 지장물 존재 여부

아. 접근방법 결정

ㅇ 구조물 하면(처마, 슬래브, 보 등)에 대한 현장조사는 사다리, 고소차, 점검차, 비계설치 등 현장여건에 따라 안전을 고려한 최선의 방법을 선택한다.

자. 진단종사자의 안전점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

차. 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

2.1.3 과업수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 재규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

나. 정밀안전진단지침

다. 콘크리트 표준시방서

라. 콘크리트 구조설계기준

마. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격(KS)

바. 국토해양부 발행 각종 관련 표준시방서

2.2 진단실시 세부사항

2.2.1 자료수집 및 분석

관리주체가 보존하는 감리보고서, 시설물관리대장 및 설계도서 등 관련서류와 다음에 명시된 자료를 수집하고 검토, 분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

가. 설계도서 : 시설물의 준공도서로서 평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

나. 시설물관리대장

다. 시공관련 자료

라. 안전점검 및 정밀안전진단자료

마. 보수.보강공사 자료

2.2.2 현장조사 및 제반관련 시험 실시

가. 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

나. 현장조사는 정밀안전진단지침에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험을 실시하여 부재별로 상태평가에 활용한다.

다. 상세 외관조사 시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토를 실시한다.

2.2.3 기본과업

과업항목		지침상 기본과업	금회 과업 내용
사전조사	자료수집 및 분석	□설계도서	左同
		□시설물관리대장
		□시공관련자료
		□안전점검, 정밀안전진단 실시결과 자료 (기존점검 지적사항의 조치결과 확인)
		□보수・보강이력 검토 분석
	육안조사	□건물용도, 사용하중의 적정성	左同
		□건물주변환경,
		□구조체 및 마감재 등 전반적인 외관상태
현장 조사 및 시험	외관조사	□전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - RC조 부분 : 균열, 누수, 층분리, 백태, 철근노출 -강재구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태	左同
	재료시험 및 측정	□강재시험 : 비파괴시험 □콘크리트 시험 : - 비파괴강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등) - 탄산화진행 깊이, - 염화물 함유량 - 철근탐사 - 주요부재규격 - 변위 · 변형	左同
상태평가		□외관조사 결과분석 □현장시험 및 재료시험 결과분석 □콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 □부재별 및 시설물 전체 상태평가 결과에 대한 소견	左同
안전성평가		□조사, 시험, 측정결과의 분석 □기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토 분석 □내하력 및 구조 안전성 평가 □시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견	左同
종합평가		□시설물의 종합평가 결과에 대한 소견 □안전등급 지정	左同
보수·보강방법		□보수 · 보강 방법 제시	左同
보고서작성 및 제출		□CAD도면작성 작성 등 보고서 작성	左同

2.2.4 선택과업

본 진단과업범위는 2.2.3의 기본과업으로 한다. 하기 선택과업은 필요시 별도협의로 추가 용역 처리한다.

과업항목	지침상 선택과업	금회과업
지료수집 및 분석	□구조 · 수리 · 수문 계산(계산서가 없는 경우) □실축도면 작성(도면이 없는 경우)	해당사항 없음
현장조사 및 시험	□시료채취 및 실내시험 □지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 □수중조사 □조사용 접근장비 운용 □기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 □기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사 · 시험	필요시 책임기술자가 관리주체와 별도 협의하에 추가용역처리
안전성 평가	□구조해석
	□구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문
	□내진성능 평가 및 사용성 평가
	□임시 고정하중에 대한 안전성평가
보수ㆍ보강 방법	□내진보강 방안 제시
	□시설물 유지관리 방안 제시

2.2.5 상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하여, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다. 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 정밀안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

2.2.6 안전성평가

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내력 등을 종합적으로 평가하여 지침의 안전성 평가기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다. 보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석 결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

2.2.7 종합평가 및 안전등급 지정

가. 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

나. 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다. 다만 정밀안전진단 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수･보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

상태등급	상 태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 건축물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 건축물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2.2.8 보수∙보강방법

가. 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가 결과 등을 보강하기 위해서 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수 · 보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

나. 보수 · 보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준 등을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도 까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

다. 보수 · 보강의 수준의 결정

보수 · 보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정 한다.

ㅇ 현상유지(진행억제)

ㅇ 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

ㅇ 초기 수준이상으로 개선

ㅇ 개축

라. 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수 · 보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택 할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수 · 보강공법을 선정하여야 한다.

마. 보수 · 보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수 · 보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

ㅇ 보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

ㅇ 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

바. 유지관리 방안제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용 할 수 있도록 하여야 한다.

3. 보고서 작성방법

3.1 일반

정밀안전진단 실시결과 보고서는 시설물 발주처의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성 · 제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 지침을 참조한다.

3.2 정밀안전진단 보고서에 포함될 사항

3.2.1 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

가. 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

나. 정밀안전진단 결과표(안전등급)

다. 시설물 현황표

라. 참여 기술진 명단

마. 시설물의 위치도

바. 시설물의 전경사진, 부위별 사진

사. 정밀안전진단 실시 결과 요약문

아. 보고서 목차

3.2.2 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 정밀안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

가. 진단의 목적

나. 시설물의 개요 및 이력사항

다. 진단의 범위 및 과업내용

라. 사용장비 및 시험기기 현황

마. 진단 수행 일정

3.2.3 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련 자료를 검토 · 분석하고 그 내용을 기술한다.

가. 설계도면, 구조계산서

나. 기존 정밀점검･정밀안전진단 실시결과

다. 보수 · 보강이력 및 용도변경

라. 시설물의 내진설계 여부확인

마. 기타 관련자료

3.2.4 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

가. 전체 시설물 외관조사 결과분석

나. 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

다. 재료시험, 측정결과의 분석

3.2.5 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성하며, 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

가. 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

나. 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

3.2.6 시설물의 안전성 평가

과업내용에 의거 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

가. 현장 재하시험 및 계측결과 분석

나. 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

다. 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

라. 시설물의 내(하)력 평가

마. 정밀안전진단 결과 시설물의 보수･보강방법을 제시한 때에는 보수･보강 시 예상되는 임시고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

바. 시설물의 안전성 평가 결정

안전성 평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

3.2.7 종합평가

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정 종합평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

3.2.8 안전등급 지정

정밀안전진단 실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 당해 시설물의 안전 등급을 지정하여야 한다.

3.2.9 보수․보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수・보강 방법을 제시함.

가. 보수・보강방안에 대한 개요, 시공방법, 시공 시 주의사항 등

나. 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

3.2.10 종합결론 및 건의사항

가. 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

나. 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

다. 기타 필요한 사항

3.2.11 부록

가. 과업지시서

나. 외관 조사망도

다. 구조해석 모델링 및 수치해석자료(입출력자료는 e-보고서에 포함)

라. 측정, 시험, 계측 성과표

마. 상태평가 결과 자료

바. 안전성평가 결과 자료

사. 시설물관리대장 사본

아. 현황조사 및 외관조사 사진첩

자. 사용장비 및 기기의 사진

카. 사전조사 자료 일체(사전검토보고서, 과업수행계획서 등의 관련자료)

파. 기타 참고자료(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

4. 성과품 납품목록

이 과업과 관련한 성과품은 다음과 같으며 이에 대한 지불은 산출내역서상의 계약금액으로 한다.

가. 정밀안전진단 보고서(사진, 부록포함) : 5부

나. 보고서 완본수록 USB : 5개