KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역

과업내용서

2022.  6.  16.

본 과업내용서는 KBS미디어센터의 기계설비성능점검 대행 용역 입찰에 있어 KBS미디어 주식회사(이하 “발주처”)가 계약자인 용역업체(이하 “계약상대자”)에게 요구하는 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

1. 과업의 개요

가. 과업명 : KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역

나. 위치 : 서울시 마포구 매봉산로 45, KBS미디어센터

- 지하 5층 ~ 지상 21층 / 연면적 44,838.74㎡ / 준공년도 2007.11.15

다. 개요

1) 본 과업은 「기계설비법」 및 「기계설비 유지관리기준」 에 따라 1회/년 성능점검을 실시하여 기계시설물 수명증대 및 에너지 관리에 만전을 기하기 위함

2) 본 용역의 계약상대자는 용역과 관계되는 법률, 시행령, 규칙, 훈련 및 예규 등을 숙지하고 이를 준수하여야 하며 계약상대자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다.

라. 과업기간 : 계약체결일 ~ 2022.8.3.

마. 점검대상 : 본 센터의 기계설비 66대, 9식

바. 용역업체의 자격 : 「기계설비법」에 제21조에 따라 기계설비성능점검업을 등록한 업체

2. 일반사항

가. 본 과업의 목적은 시설의 종류 및 중요도, 점검방법 및 업무 효율성을 고려하여 체계적인 성능점검을 시행하고, 그 결과를 바탕으로 2022년 KBS미디어의 기계설비 성능 개선계획을 수립하는 데 있다.

나. 본 과업과 관련하여 관련법령 및 규정이 제정 또는 개정되는 경우 이에 따라야 한다.

다. 기계설비 성능검사는 ｢기계설비법｣, ｢기계설비 유지관리기준｣ 등에 따라 적정하게 처리하여야 하며, 처리과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

라. 계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

마. 본 과업 수행 중 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약상대자의 부담으로 처리하여야 하며, 관련 민원에 대하여도 계약상대자의 책임으로 해결하여야 한다.

바. 당해 용역에 대하여는 작업장소를 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 과업의 범위

구분	과업 구분	주요 내용
1	기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립	ㅇ 유지관리지침서의 적정성 및 시스템 검토 - 점검대상 및 내용 확인 - 설계도서 및 운전자료, 보수이력 등 기초자료 수집 - 현장확인 및 문제점 청취(인터뷰 등) ㅇ 성능점검 계획 수립 - 점검계획 수립 : 성능점검계획/절차서 작성
2	성능점검 및 에너지사용량 검토	ㅇ 기계설비 시스템 외관, 운전 및 안전상태 점검 ㅇ 기계설비 시스템의 성능/작동 상태 ㅇ 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부 ㅇ 냉난방설비 등 분류별 에너지 사용량 검토
3	재해방지대책 수립 등 안전조치 사항 작성	ㅇ 성능점검 전 - 기계설비 유지관리 대상 점검표 작성 - 재해방지대책 수립 ㅇ 성능점검 시 - 응급상황 작업 매뉴얼 작성 (유지관리 관련 작성 포함) ㅇ 성능점검 후 - 기계설비의 사고 또는 이상상황 발생 시 필요 조치 및 재발방지대책 수립 (유지관리 관련 작성 포함)
4	성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 계획 수립	ㅇ 성능점검 결과 보고 - 성능점검 결과 분석 및 평가 - 에너지 효율 적정성 검토 및 개선방안 ㅇ 기계설비 시스템의 내구연수에 따른 노후도 ㅇ 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항 도출 ㅇ 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획
5	기타사항	ㅇ 기계설비 유지관리 및 성능점검계획수립 작성 제출 ㅇ 성능점검 대상 현황표, 점검표 작성 제출 ㅇ 모든양식 기계설비 유지관리기준 표준양식 의거 작성

가. 과업내용

※ 상기 과업내용은 특급 책임기계설비유지관리자가 작성해야 한다.

점검대상 기계설비		점검수량 산출기준	전체수량	점검수량
열원 및 냉난방설비	열교환기	전체수량의 50% 이상	11	6
	팽창탱크	전체 수량	7	7
	펌프	전체수량의 20% 이상	26	6
	패키지에어컨	전체수량의 20% 이상	25	5
	항온항습기	전체수량의 20% 이상	7	2
공기조화설비	공기조화기	전체수량의 20% 이상	28	6
	팬코일유닛	1개 층 이상	27	27
환기설비	환기설비	전체수량의 20% 이상	32	7
위생기구설비		식	1	1
급수, 급탕설비	급수펌프, 급탕탱크 등	식	1	1
	고・저수조	식	1	1
오・배수 통기 및 우수배수설비		식	1	1
배관설비		식	1	1
덕트설비		식	1	1
보온설비		식	1	1
자동제어설비		식	1	1
방음・방진・내진 설비		식	1	1

나. 점검대상 기계설비

4. 용역 일반사항

가. 감독자의 의무

- 용역의 감독자는 계약된 용역의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 현장요원 등 당해 용역을 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급 계약을 체결한자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 용역시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

나. 계약상대자의 책무

1) 계약상대자는 용역 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 용역에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

2) 계약상대자가 발주처에 통지하지 아니하거나 발주처의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행하여서는 안 된다.

3) 본 용역설명서의 내용이 누락 되었거나 잘못명기 되었을 경우 또는 의문이 발생 되었을 경우 발주처와 협의하여야 하고, 견해차이가 있을 경우에는 조정 혹은 수정하는 것을 원칙으로 한다.

4) 계약상대자가 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 용역 감독자를 경유하여 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

5) 용역 수행 중 감독자의 지시에 의거 각 공종에 따른 검수를 득한 후 다음 공종으로 용역절차가 시행되어야 하며, 용역 완료시 즉시 검사를 받아야 한다.

6) 성능점검은 발주처 감독자의 입회하에 실시하여야 한다.

7) 계약상대자는 용역을 수행함에 있어 작업 전 주변장치 점검을 철저히 하며 용역 작업 내역 외 추가로 일어날 수 있는 위해 요소가 있을시 발주처에 미리 통보하고 승인 하에 작업에 임한다.

다. 품질 관리 및 보증

1) 계약상대자는 본 성능점검 용역에서 발주처의 요구사항을 만족시키기 위하여 필요한 품질관리 절차 및 문제점을 수행할 수 있어야 한다.

2) 본 용역 중 기기가 손상될 우려가 있을 때는 필요한 예방책을 강구하여야 하며, 시설물을 파괴 또는 훼손시켰을 시 즉시 복구하고, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담으로 한다.

라. 안전관리

1) 본 용역의 안전, 보건 및 환경관리는 관련법(산업안전보건법, 중대재해처벌법 등)이 정하는 바에 따라야한다.

2) 발주처는 계약상대자에게 대면, 유선 또는 서면으로 안전·보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법 등)에 대한 사항을 지시할 수 있다.

3) 계약상대자는 본 용역에 투입중인 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제51조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시작업을 중단하는 등 근로자 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

4) 계약상대자는 용역장 내의 계약상대자 측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전 대책을 수립, 시행한다.

5) 계약상대자는 발주처가 행하는 「산업안전보건법」에 따른 순회점검을 거부·방해 또는 기피해서는 안 되며 점검결과 시정요구 사항이 있으면 이에 따라야 한다.

6) 계약상대자는 용역구간의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선하는 위험성평가를 실시하고 그 결과를 감독관에게 제출하고, 안전조치를 취한다.

7) 사고 발생 시, 즉시 필요한 조치(인적 및 물적 피해, 손실)를 취하고, 이를 방지하기 위하여 감독자는 계약상대자(현장 상주자 포함)에게 작업 전에 필요한 안전관리 수칙을 숙지하도록 충분한 안전교육을 하고, 항상 주의를 환기시킬 것이며, 용역 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때는 필요한 예방책을 강구하여야 한다.

8) 계약상대자는 안전 및 보안 유지를 위하여 용역장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

9) 자재 중, 화기 위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하는 등 화재에 대비한 후 과업을 시행하여야 한다.

10) 용역의 제반 작업 시 사전에 필요한 안전시설물을 설치하고 작업을 시행한다.

11) 계약상대자는 용역 과업 수행 관련 안전사고와 기존 장비 및 시설에 대한 피해 등 손실에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리를 부담한다.

12) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전·보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

마. 현장관리

1) 용역 중 계약상대자는 감독자 및 발주처의 승인 없이 교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 사용방법을 해서는 안 된다.

2) 계약상대자는 현장과 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대해 지장을 주지 않도록 유의하여 설치하여야 하며 적절한 안전 표지판이나 칸막이 등의 시설을 설치하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 용역의 수행으로 인하여 인접한 시민은 물론 통행인과 공작물에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상 복구하거나 보상하여야 한다.

4) 설치현장에 용역 외 일반인 출입을 감시하고 풍기, 위생, 보안의 단속과 화재, 도난 기타의 사고방지에 대하여 유의하여야 한다.

5) 용역장 출입에 필요시 코로나 예방을 위한 체온 체크 및 건강상태 점검에 적극 협조하여야 한다.

바. 작업시간

1) 용역의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 부득이한 사정으로 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 용역장의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 발주처에서 요청할 때는 계약상대자간 협의하여 처리할 수 있다.

사. 작업 전, 후의 처리

1) 계약상대자는 설치 작업 전 유관기관의 협조가 필요한 사항에 대해 적기에 조치하고 현장 내 기존시설 및 유지에 불편이 없도록 제반 조치를 강구하여야 한다.

2) 작업 전 메인 전원 차단 및 작업 후 전기 공급이 필요한 점검시에는 사전에 감독자에게 승인 받은 후 진행한다.

4. 제출서류

가. 착수시

1) 착수계

2) 착수내역서

3) 용역수행예정표

4) 인력 및 장비투입계획서, 안전관리계획서

5) 성능점검계획서

6) 산재가입증명서

- 가입증명서에 용역명, 용역기간 표기된 서류 제출

7) 기타 요구 서류

나. 준공시

1) 준공계

2) 준공신고서

3) 성능점검보고서 (2부)

4) 준공검사원

5) 준공내역서

6) 사진대지(전, 중, 후)

7) 산재보험 납부확인서

8) 성능점검보고서 USB 파일 (2개)

- 기계설비 성능점검 대상 현황표, 점검표 제출

- 기계설비 성능점검 결과보고서

- 기계설비 유지관리 및 성능점검계획수립

- 기계설비 성능점검 전 재해방지대책, 응급상황 대처 매뉴얼 작성,
사고·고장 등의 재발방지대책 제출
(모든 서류는 기계설비 유지관리기준 표준안 권장양식에 의거 작성)

9) 기타 발주처가 요구하는 준공 서류 일체

[별지 제1호 서식]

긴 급 입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2022 - 3호		입 찰 일 자	2022. 6. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2022. 6. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2019년	2020년	2021년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역』 입찰과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2022년   6월     일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역』 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2022년    6월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2022-3호		입 찰 회 차				제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 기계설비 성능점검 용역			십억	억	천만	백만		십만	만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청서의 지급확약 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정 및 과업내용서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이   입찰함.

※ 보증금은 투찰 금액의 5%를 한글로 기입 후 제출

2022년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출